РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
02 сентября 2021 						№ 3643
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»

В соответствии со статьями 22, 31 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 29.04.2019 № 1802 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»:
1.1. в Паспорте муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы»:
1.1.1 строку 8 изложить в новой редакции:
«Объемы и источники финансирования	Финансирование муниципальной адресной программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1 687 682 823,71 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 241 856 705,93 рублей;
этап 2020 - 2021 – 158 843 008,81 рублей;
этап 2021 - 2022 – 298 664 680,25 рублей;
этап 2022 - 2023 – 227 444 100,09 рублей;
этап 2023 - 2024 – 414 801 925,40 рублей;
этап 2024 - 2025 – 346 072 403,23 рублей, из них:
средства федерального бюджета – 1 436 370 801,58 рублей, в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 154 867 795,73 рублей;
этап 2020 - 2021 – 118 763 226,68 рублей;
этап 2021 - 2022 – 267 184 030,18 рублей;
этап 2022 - 2023 – 185 388 516,72 рублей;
этап 2023 - 2024 – 370 947 747,92 рублей;
этап 2024 - 2025 – 339 219 484,23 рублей;
средства областного бюджета – 199 067 951,47 рублей, 
в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 70 135 244,46 рублей;
этап 2020 - 2021 – 25 353 397,50 рублей;
этап 2021 - 2022 – 19 863 450,07 рублей;
этап 2022 - 2023 – 40 144 700,00 рублей;
этап 2023 - 2024 – 40 144 700,00 рублей;
этап 2024 - 2025 – 3 426 459,44 рублей;
средства бюджета города Орла – 52 244 070,79 рублей, 
в том числе по годам:
этап 2019 - 2020 – 16 853 665,74 рублей;
этап 2020 - 2021 – 14 726 384,63 рублей;
этап 2021 - 2022 – 11 617 200,00 рублей;
этап 2022 - 2023 – 1 910 883,37 рублей;
этап 2023 - 2024 – 3 709 477,48 рублей;
этап 2024 - 2025 – 3 426 459,44 рублей.
Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при утверждении бюджета города Орла на очередной финансовый год.»;	

1.1.2. абзацы 4-10 раздела 8 «Объем долевого финансирования» изложить в новой редакции:
«Общая стоимость составляет 1 687 682 823,71  рублей, в том числе: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства –1 436 370 801,58 рублей; средства областного бюджета – 199 067 951,47 рублей; средства местных бюджетов – 52 244 070,66 рублей:
- этап 2019 - 2020 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 154 867 795,73 рублей, средства областного бюджета - 70 135 244,46 рублей, средства местного бюджета –  16 853 665,74 рублей;
- этап 2020 - 2021 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 118 763 226,68 рублей, средства областного бюджета – 25 353 397,50 рублей, средства местного бюджета –   14 726 384,63 рублей;
- этап 2021 - 2022 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 267 184 030,18 рублей, средства областного бюджета – 19 863 450,07 рублей, средства местного бюджета –     11 617 200,00 рублей;
- этап 2022 - 2023 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 185 388 516,72 рублей, средства областного бюджета – 40 144 700,00 рублей, средства местного бюджета –     1 910 883,37 рублей;
- этап 2023 - 2024 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 370 647 747,92 рублей, средства областного бюджета – 40 144 700,00 рублей, средства местного бюджета –     3 709 477,48 рублей;
- этап 2024 - 2025 годов: средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 339 219 484,35 рублей, средства областного бюджета – 3 426 459,44 рублей, средства местного бюджета –     3 426 459,44 рублей.»;
1.2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4  к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложения №№ 1, 2, 3, 4);
1.3. Приложение № 2 к паспорту муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Орел» на 2019-2025 годы» изложить в новой редакции (Приложение №5). 
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации и аналитической работе администрации города Орла (И.Е. Башкатова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла.                               

Мэр города Орла                                                                                 Ю.Н. Парахин

				Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                            к постановлению администрации города Орла                                                    от 02 сентября 2021 № 3643	
				Приложение 1                                                                                                                                                                                                                                            к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории                                                                                      Орловской области, из аварийного жилищного фонда»                                      на 2019–2025 годы	
								
	Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года		
								
№	Наименование муниципального образования 	Адрес многоквартирного дома	Год ввода дома в эксплуатацию	Дата признания многоквартирного дома аварийным 	 Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года 	Планируемая дата окончания переселения	
			год	дата	площадь, кв. м	количество человек	дата	
1	2	3	4	5	6	7	8	
По программе переселения 2019 – 2025 гг.,  в том числе:	х	х	44 155,86	3 119	х	
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:	х	х	42 593,26	3 033	х	
Итого по городу Орлу:	х	х	42 593,26	3 033	х	
1	Орёл	г. Орёл, ул. 5 Августа, д. 14	1918	28.09.2015	130,60	10	31.08.2025	
2	Орёл	г. Орёл, ул. Абрамова и Соколова, д. 76, лит. а	1956	30.12.2016	319,40	23	31.08.2025	
3	Орёл	г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 1	1957	04.06.2014	1 002,00	49	31.12.2024	
4	Орёл	г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 3	1957	24.09.2013	769,60	60	31.12.2022	
5	Орёл	г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 7	1958	03.09.2013	742,00	65	31.12.2022	
6	Орёл	г. Орёл, ул. Автогрейдерная, д. 9	1958	27.01.2012	545,52	38	31.12.2020	
7	Орёл	г. Орёл, ул. Андреева, д. 19	1962	05.07.2013	270,70	15	31.12.2022	
8	Орёл	г. Орёл, ул. Андреева, д. 21	1959	01.11.2012	350,30	36	31.12.2021	
9	Орёл	г. Орёл, ул. Антонова, д. 1	1965	31.10.2013	564,20	27	31.12.2023	
10	Орёл	г. Орёл, ул. Антонова, д. 2	1962	31.10.2013	590,00	34	31.12.2023	
11	Орёл	г. Орёл, ул. Антонова, д. 3	1966	31.10.2013	577,20	26	31.12.2023	
12	Орёл	г. Орёл, ул. Антонова, д. 4	1961	31.10.2013	571,80	30	31.12.2023	
13	Орёл	г. Орёл, ул. Антонова, д. 6	1960	31.10.2013	554,60	22	31.12.2023	
14	Орёл	г. Орёл, ул. Антонова, д. 8	1960	31.10.2013	638,90	24	31.12.2023	
15	Орёл	г. Орёл, пер. Бетонный, д. 4	1959	01.09.2014	641,50	63	31.12.2024	
16	Орёл	г. Орёл, ул. Брянская, д. 1	1957	03.09.2013	116,40	8	31.12.2022	
17	Орёл	г. Орёл, ул. Васильевская, д. 15	1917	25.12.2014	98,50	4	31.12.2024	
18	Орёл	г. Орёл, ул. Васильевская, д. 27	1917	04.07.2012	367,20	26	31.12.2021	
19	Орёл	г. Орёл, ул. Васильевская, д. 29	1917	31.10.2013	227,30	19	31.12.2023	
20	Орёл	г. Орёл, ул. Васильевская, д. 33	1917	21.07.2014	118,30	14	31.12.2024	
21	Орёл	г. Орёл, ул. Васильевская, д. 48	1881	27.01.2012	118,70	11	31.12.2020	
22	Орёл	г. Орёл, ул. Ватная, д. 16	1959	25.09.2015	438,00	27	31.08.2025	
23	Орёл	г. Орёл, ул. Высоковольтная, д. 6а	1961	12.12.2012	85,80	10	31.12.2021	
24	Орёл	г. Орёл, ул. Гагарина, д. 21	1917	08.12.2016	369,40	43	31.08.2025	
25	Орёл	г. Орёл, пер. Гайдара, д. 4	1962	25.12.2014	274,90	18	31.08.2025	
26	Орёл	г. Орёл, ул. Гайдара, д. 35	1960	25.12.2014	517,90	39	31.12.2024	
27	Орёл	г. Орёл, ул. Гайдара, д. 39	1964	25.12.2014	511,00	35	31.08.2024	
28	Орёл	г. Орёл, ул. Гайдара, д. 41	1959	25.12.2014	339,10	19	31.12.2024	
29	Орёл	г. Орёл, ул. Гайдара, д. 43	1961	25.12.2014	273,90	17	31.12.2024	
30	Орёл	г. Орёл, ул. Гайдара, д. 45	1960	25.12.2014	265,50	14	31.12.2024	
31	Орёл	г. Орёл, ул. Гайдара, д. 47	1960	25.12.2014	271,40	19	31.12.2024	
32	Орёл	г. Орёл, ул. Гвардейская, д. 8	1957	21.11.2014	367,60	32	31.12.2024	
33	Орёл	г. Орёл, ул. Грановского, д. 1	1957	31.05.2012	406,60	27	31.12.2020	
34	Орёл	г. Орёл, ул. Грановского, д. 5	1958	29.09.2015	420,40	25	30.08.2025	
35	Орёл	г. Орёл, ул. Деповская, д. 13	1959	25.08.2016	318,20	19	31.08.2025	
36	Орёл	г. Орёл, ул. Емельяна Пугачева, д. 90	1955	21.11.2014	570,80	58	31.12.2024	
37	Орёл	г. Орёл, пер. Загородный, д. 11	1959	14.02.2014	271,30	17	30.12.2024	
38	Орёл	г. Орёл, пер. Загородный, д. 13	1961	04.07.2012	566,10	40	31.12.2021	
39	Орёл	г. Орёл, ул. Калинина, д. 45	1960	26.02.2013	372,20	27	31.12.2022	
40	Орёл	г. Орёл, ул. Карачевская, д. 27	1917	28.09.2015	134,90	17	31.08.2025	
41	Орёл	г. Орёл, ул. Карачевская, д. 49	1917	28.04.2016	159,10	14	31.08.2025	
42	Орёл	г. Орёл, ул. Карачевская, д. 53	1917	24.01.2013	216,20	10	31.12.2022	
43	Орёл	г. Орёл, ул. Карачевская, д. 62	1920	15.05.2013	113,70	11	31.12.2022	
44	Орёл	г. Орёл, ул. Карачевская, д. 86	1884	31.05.2012	90,90	8	31.12.2020	
45	Орёл	г. Орёл, ул. Карачевская, д. 116	1917	31.05.2012	96,50	3	31.12.2021	
46	Орёл	г. Орёл, ш. Карачевское, д. 9	1937	24.09.2013	170,90	8	31.12.2023	
47	Орёл	г. Орёл, ш. Карачевское, д. 58	1962	21.07.2014	404,10	23	31.12.2024	
48	Орёл	г. Орёл, ш. Карачевское, д. 62	1957	31.10.2013	390,50	28	31.12.2023	
49	Орёл	г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 12	1959	08.10.2015	383,10	23	31.08.2025	
50	Орёл	г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 14	1967	04.12.2013	493,08	61	31.12.2024	
51	Орёл	г. Орёл, п. Кирпичного завода, д. 18	1960	12.12.2012	361,10	29	31.12.2022	
52	Орёл	г. Орёл, ул. Коллективная, д. 1	1957	15.05.2013	414,20	19	21.12.2022	
53	Орёл	г. Орёл, ул. Коллективная, д. 2	1960	05.07.2013	357,40	35	31.12.2022	
54	Орёл	г. Орёл, ул. Коллективная, д. 8	1959	05.07.2013	376,90	29	31.12.2022	
55	Орёл	г. Орёл, ул. Красина, д. 18	1916	30.07.2012	194,70	9	31.12.2021	
56	Орёл	г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 1	1961	31.10.2013	383,90	31	31.12.2020	
57	Орёл	г. Орёл, ул. Куйбышева, д. 3	1961	31.10.2013	317,70	17	31.12.2020	
58	Орёл	г. Орёл, ул. Курская 1-я, д. 14	1917	04.12.2013	114,50	6	31.12.2024	
59	Орёл	г. Орёл, ул. Курская 1-я, д. 88, лит. б	1946	15.05.2013	428,20	46	31.12.2022	
60	Орёл	г. Орёл, ул. Курская 1-я, д. 99A	1947	03.09.2013	789,70	41	31.12.2022	
61	Орёл	г. Орёл, ул. Курская 2-я, д. 88	1917	08.12.2016	702,17	87	31.08.2025	
62	Орёл	г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 2а	1953	04.04.2013	426,30	34	21.12.2022	
63	Орёл	г. Орёл, ул. Латышских Стрелков, д. 92а	1961	31.10.2013	331,10	31	31.12.2023	
64	Орёл	г. Орёл, ул. Ленина, д. 30 а	1917	25.12.2014	369,30	15	31.08.2024	
65	Орёл	г. Орёл, ул. Лесная, д. 5	1946	21.03.2014	466,00	37	31.12.2024	
66	Орёл	г. Орёл, ул. Льва Толстого, д. 20	1953	27.01.2012	385,40	15	31.12.2020	
67	Орёл	г. Орёл, пер. Маслозаводской, д. 12	1958	25.08.2016	832,60	88	31.08.2025	
68	Орёл	г. Орёл, ул. Мичурина, д. 70	1951	27.01.2012	264,40	22	31.12.2020	
69	Орёл	г. Орёл, ш. Московское, д. 64	1950	12.12.2012	167,40	16	31.12.2021	
70	Орёл	г. Орёл, ул. Октябрьская, д. 6	1917	15.05.2013	266,30	19	31.12.2022	
71	Орёл	г. Орёл, ул. Панчука, д. 18, лит. а	1917	04.12.2013	239,70	17	31.12.2024	
72	Орёл	г. Орёл, ул. Панчука, д. 43	1917	04.06.2014	89,40	8	31.12.2024	
73	Орёл	г. Орёл, ул. Песковская, д. 12 а	1959	05.07.2016	416,60	25	31.08.2025	
74	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 4	1961	31.10.2013	543,80	19	31.12.2023	
75	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 6	1957	31.10.2013	399,50	37	31.12.2020	
76	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 8	1958	31.10.2013	400,70	26	31.12.2020	
77	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 9	1959	31.10.2013	272,70	14	31.12.2023	
78	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 10	1957	27.01.2012	306,40	22	31.12.2020	
79	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 12	1957	31.10.2013	414,20	33	31.12.2020	
80	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 14	1959	27.01.2012	196,50	25	31.12.2020	
81	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 15	1959	31.10.2013	272,00	15	31.12.2023	
82	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 17	1959	31.10.2013	278,40	11	31.12.2023	
83	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 19	1959	31.10.2013	274,60	16	31.12.2023	
84	Орёл	г. Орёл, ул. Плещеевская, д. 21	1959	31.10.2013	282,20	20	31.12.2023	
85	Орёл	г. Орёл, б-р Победы, д. 11	1953	12.12.2012	415,00	16	31.12.2021	
86	Орёл	г. Орёл, ул. Посадская 1-я, д. 4\6	1917	15.05.2013	325,60	23	31.12.2022	
87	Орёл	г. Орёл, ул. Посадская 2-я, д. 17	1891	08.12.2016	129,00	20	31.08.2025	
88	Орёл	г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 38	1917	04.12.2013	410,80	25	31.12.2024	
89	Орёл	г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 40	1917	04.12.2013	111,30	12	31.12.2024	
90	Орёл	г. Орёл, ул. Привокзальная, д. 42	1917	29.02.2012	17,40	1	31.12.2020	
91	Орёл	г. Орёл, ул. Прядильная, д. 50	1900	12.12.2012	84,60	10	31.12.2021	
92	Орёл	г. Орёл, ул. Пушкарная 1-я, д. 8	1900	29.02.2012	291,90	27	31.12.2020	
93	Орёл	г. Орёл, ул. Пушкарная 1-я, д. 14	1917	29.02.2012	377,00	21	31.12.2020	
94	Орёл	г. Орёл, ул. Пушкина, д. 7а	1918	20.03.2015	182,10	16	31.08.2025	
95	Орёл	г. Орёл, ул. Пушкина, д. 45	1917	28.04.2016	208,20	18	31.08.2025	
96	Орёл	г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100	1917	27.01.2012	19,30	3	31.12.2020	
97	Орёл	г. Орёл, ул. Пушкина, д. 100а	1917	29.02.2012	167,70	14	31.12.2020	
98	Орёл	г. Орёл, городок Рабочий, д. 20	1917	30.03.2012	16,10	2	31.12.2020	
99	Орёл	г. Орёл, городок Рабочий, д. 31	1917	27.01.2012	78,90	3	31.12.2020	
100	Орёл	г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 4	1946	15.05.2013	256,50	15	31.12.2022	
101	Орёл	г. Орёл, ул. Рельсовая, д. 8	1956	04.06.2014	409,60	25	31.12.2024	
102	Орёл	г. Орёл, проезд Связистов, д. 2	1953	25.12.2014	226,30	9	31.12.2024	
103	Орёл	г. Орёл, проезд Связистов, д. 4	1951	26.09.2014	146,40	14	31.12.2024	
104	Орёл	г. Орёл, проезд Связистов, д. 12	1917	24.01.2013	205,20	14	31.12.2022	
105	Орёл	г. Орёл, ул. Семинарская, д. 34	1898	25.12.2014	198,34	11	31.08.2025	
106	Орёл	г. Орёл, ул. Серпуховская, д. 113	1957	25.09.2015	387,80	26	31.08.2025	
107	Орёл	г. Орёл, ул. Смоленская, д. 78	1957	25.09.2015	416,70	25	31.08.2025	
108	Орёл	г. Орёл, ул. Спивака, д. 66	1957	03.09.2013	412,90	14	31.12.2022	
109	Орёл	г. Орёл, ул. Сурена Шаумяна, д. 34	1955	04.12.2013	789,20	48	31.12.2024	
110	Орёл	г. Орёл, пер. Трамвайный, д. 2	1949	14.07.2016	692,75	63	31.08.2025	
111	Орёл	г. Орёл, пер. Транспортный, д. 5	1917	04.12.2013	75,50	8	31.12.2024	
112	Орёл	г. Орёл, пер. Транспортный, д. 14	1917	25.08.2016	228,10	27	31.08.2025	
113	Орёл	г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 27	1964	20.02.2016	383,50	18	31.08.2025	
114	Орёл	г. Орёл, ул. Фестивальная, д. 29	1964	05.10.2016	389,60	20	31.08.2025	
115	Орёл	г. Орёл, пер. Хвойный, д. 11	1961	21.07.2014	482,60	29	31.12.2024	
116	Орёл	г. Орёл, пер. Хвойный, д. 12	1960	05.07.2013	272,00	13	31.12.2022	
117	Орёл	г. Орёл, пер. Хлебный, д. 6	1946	15.05.2013	89,80	7	31.12.2022	
118	Орёл	г. Орёл, ул. Цветаева, д. 1а	1962	31.10.2013	576,40	35	31.12.2024	
119	Орёл	г. Орёл, ул. Цветаева, д. 3	1957	31.10.2013	418,40	37	31.12.2023	
120	Орёл	г. Орёл, ул. Цветаева, д. 5	1958	05.07.2013	397,20	35	31.12.2022	
121	Орёл	г. Орёл, ул. Черкасская, д. 73	1917	04.12.2013	75,00	9	31.12.2024	
122	Орёл	г. Орёл, пл. Щепная, д. 14	1890	20.02.2016	292,20	19	31.08.2025	
123	Орёл	г. Орёл, проезд Щорса, д. 23	1958	24.03.2013	563,10	49	31.12.2023	
124	Орёл	г. Орёл, пер. Южный, д. 20	1957	03.03.2015	429,50	42	31.08.2025	
По программе переселения 2019 – 2025 гг., в рамках которой не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:	х	х	1 562,60	86	х	
Итого по городу Орлу:	х	х	1 562,60	86	х	
1	Орёл	г. Орёл, пер. Лескова, д. 2	1952	12.12.2012	522,60	27	31.12.2022	
2	Орёл	г. Орёл, пер. Лескова, д. 4	1953	12.12.2012	523,40	30	31.12.2022	
3	Орёл	г. Орёл, ул. Лескова, д. 14	1952	12.12.2012	516,60	29	31.12.2022	
						
Первый заместитель Мэра города Орла					О.В. Минкин	

											Приложение 2                                                                                                       к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643	
											                            Приложение 2                                                                                                       к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы	

																			
																			
	План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, 
по способам переселения	
																			
№	Наименование муниципального образования	Всего расселяемая площадь жилых помещений	Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств	Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств	
			всего:	в том числе:	всего:	в том числе:	
				выкуп жилых помещений у собственников	договор о развитии застроенной территории	переселение в свободный жилищный фонд		строительство домов	приобретение жилых помещений у застройщиков, в т. ч.:	приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками	
									в строящихся домах	в домах, введенных в эксплуатацию		
			расселяемая площадь	расселяемая площадь	стоимость	расселяемая площадь	расселяемая площадь	расселяемая площадь	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	приобретаемая площадь	стоимость	
		кв. м	кв. м	кв. м	руб.	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	руб.	кв. м	руб.	кв. м	руб.	кв. м	руб.	кв. м	руб.	
Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т. ч.:	44 155,86	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Всего по этапу 2019 года	5 289,22	3 249,32	2 736,72	127 082 986,47	0,00	512,60	2 039,90	2 707,84	114 773 719,46	0,00	0,00	1 863,17	75 496 564,46	844,67	39 277 155,00	0,00	0,00	
Всего по этапу 2020 года	4 540,87	3 488,87	2 348,13	79 306 588,35	900,84	239,90	1 052,00	1 399,16	79 536 420,46	0,00	0,00	370,56	36 010 410,46	1 028,60	43 526 010,00	0,00	0,00	
Всего по этапу 2021 года	9 094,86	6 163,56	4 585,40	52 554 670,23	661,76	916,40	2 931,30	3 898,63	246 110 010,02	0,00	0,00	2 477,93	188 461 260,02	1 420,70	57 648 750,00	0,00	0,00	
Всего по этапу 2022 года	7 629,77	6 218,43	5 304,87	158 138 631,08	0,00	913,56	1 411,34	1 877,08	69 305 469,01	0,00	0,00	1 877,08	69 305 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по этапу 2023 года	10 563,02	6 516,85	6 516,85	252 652 935,22	0,00	0,00	4 046,17	5 381,41	162 148 990,18	0,00	0,00	5 381,41	162 148 990,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по этапу 2024 года	7 038,12	4 896,42	4 896,42	243 084 133,80	0,00	0,00	2 141,70	2 848,46	102 988 269,43	0,00	0,00	2 848,46	102 988 269,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

																			
																			
	Первый заместитель Мэра города Орла
О.В. Минкин	

											Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                            к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643	
																	
											Приложение 3                                                                                                                                                                                                                                            к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории                                                                                      Орловской области, из аварийного жилищного фонда»                                      на 2019–2025 годы	

	План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года	
																			
№	Наименование муниципального образования	Число жителей, планируемых  к переселению	Количество расселяемых жилых помещений	Расселяемая площадь жилых помещений	Источники финансирования программы	Справочно:
расчетная сумма экономии бюджетных средств	Справочно: 
возмещение части стоимости жилых помещений	
			всего	в том числе	всего	в том числе	всего	в том числе:	всего	в том числе:	всего	в том числе:	
				собственность граждан	муниципальная собственность		собственность граждан	муниципальная собственность		за счет средств Фонда	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств местного бюджета		за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории	за счет  переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд		за счет средств собствен-ников жилых помещений	за счет средств иных лиц (инвестора по ДРЗТ)	
		чел.	ед.	ед.	ед.	кв. м	кв. м	кв. м	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	
 	Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:	3 119	1 360	859	501	44 155,86	27 420,15	16 735,71	1 687 682 823,71	1 436 370 801,58	199 067 951,47	52 244 070,66	135 970 185,79	49 851 627,80	86 118 557,99	0,00	0,00	0,00	
 	Всего по этапу 2019 года	390	170	92	78	5 289,22	2 736,72	2 552,50	241 856 705,93	154 867 795,73	70 135 244,46	16 853 665,74	15 471 239,71	0,00	15 471 239,71	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по город Орёл	390	170	92	78	5 289,22	2 736,72	2 552,50	241 856 705,93	154 867 795,73	70 135 244,46	16 853 665,74	15 471 239,71	0,00	15 471 239,71	0,00	0,00	0,00	
 	Всего по этапу 2020 года	313	123	70	53	4 540,87	2 469,13	2 071,74	158 843 008,81	118 763 226,68	25 353 397,50	14 726 384,63	39 638 579,77	31 197 698,27	8 440 881,50	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по город Орёл	313	123	70	53	4 540,87	2 469,13	2 071,74	158 843 008,81	118 763 226,68	25 353 397,50	14 726 384,63	39 638 579,77	31 197 698,27	8 440 881,50	0,00	0,00	0,00	
 	Всего по этапу 2021 года	634	287	170	116	9 094,86	5 496,16	3 598,70	298 664 680,25	267 184 030,18	19 863 450,07	11 617 200,00	50 897 463,53	18 653 929,53	32 243 534,00	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по город Орёл	634	287	170	116	9 094,86	5 496,16	3 598,70	298 664 680,25	267 184 030,18	19 863 450,07	11 617 200,00	50 897 463,53	18 653 929,53	32 243 534,00	0,00	0,00	0,00	
 	Всего по этапу 2022 года	500	212	144	68	7 629,77	5 304,87	2 324,90	227 444 100,09	185 388 516,72	40 144 700,00	1 910 883,37	29 962 902,78	0,00	29 962 902,78	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по город Орёл	500	212	144	68	7 629,77	5 304,87	2 324,90	227 444 100,09	185 388 516,72	40 144 700,00	1 910 883,37	29 962 902,78	0,00	29 962 902,78	0,00	0,00	0,00	
 	Всего по этапу 2023 года	757	319	203	117	10 563,02	6 516,85	4 046,17	414 801 925,40	370 947 747,92	40 144 700,00	3 709 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по город Орёл	757	319	203	117	10 563,02	6 516,85	4 046,17	414 801 925,40	370 947 747,92	40 144 700,00	3 709 477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
 	Всего по этапу 2024 года	525	249	180	69	7 038,12	4 896,42	2 141,70	346 072 403,23	339 219 484,35	3 426 459,44	3 426 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Итого по город Орёл	525	249	180	69	7 038,12	4 896,42	2 141,70	346 072 403,23	339 219 484,35	3 426 459,44	3 426 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			
	Первый заместитель Мэра города Орла    О.В. Минкин                                                               

  					

										Приложение 4
к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643	
										Приложение 4                                                                                                                                                                                                                                            к муниципальной адресной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы	

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года	
																		
№	Наименование муниципального образования	Расселяемая площадь	Количество переселяемых жителей	
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	всего	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	всего	
		кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	кв. м	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	чел.	
Всего по  программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:	710,00 	6 291,12 	7 189,20 	5 075,47 	7 805,60 	16 377,95 	706,52 	44 155,86 	67 	423 	402 	648 	440 	964 	175 	3 119 	
Всего по этапу 2019 года	710,00 	4 579,22 	x	x	x	x	x	5 289,22 	67 	323 	x	x	x	x	x	390 	
2	Итого по городу Орлу 	710,00 	4 579,22 	x	x	x	x	x	5 289,22 	67 	323 	x	x	x	x	x	390 	
Всего по этапу 2020 года	x	1 711,90 	2 828,97 	x	x	x	x	4 540,87 	x	100 	213 	x	x	x	x	313 	
1	Итого по городу Орлу 	x	1 711,90	2 828,97	x	x	x	x	4 540,87 	x	100 	213 	x	x	x	x	313 	
Всего по этапу 2021 года	x	x	4 360,23 	4 734,63 	x	x	x	9 094,86 	x	x	189 	448 	x	x	x	637 	
2	Итого по городу Орлу 	x	x	4 360,23	4 734,63	x	x	x	9 094,86 	x	x	189 	448 	x	x	x	637 	
Всего по этапу 2022 года	x	x	x	340,84 	7 288,93 	x	x	7 629,77 	x	x	x	200 	300 	x	x	500 	
1	Итого по городу Орлу 	x	x	x	340,84	7 288,93	x	x	7 629,77 	x	x	x	200 	300 	x	x	500 	
Всего по этапу 2023 года	x	x	x	x	516,67 	10 046,35 	x	10 563,02 	x	x	x	x	140 	614 	x	754 	
1	Итого по городу Орлу 	x	x	x	x	516,67	10 046,35	x	10 563,02 	x	x	x	x	140 	614 	x	754 	
Всего по этапу 2024 года	x	x	x	x	x	6 331,60 	706,52 	7 038,12 	x	x	x	x	x	350 	175 	525 	
3	Итого по городу Орлу 	x	x	x	x	x	6 331,60	706,52	7 038,12 	x	x	x	x	x	350 	175 	525 	

																		
Первый заместитель Мэра города Орла                                                  О.В. Минкин	

												Приложение 5
к постановлению
администрации города Орла
от 02 сентября 2021 № 3643			

												 Приложение 2
к паспорту муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "Город Орёл"			
															
	План-график реализации программы переселения 	
№п/п	Наименование муниципального образования/ способ переселения	Расселяемая  площадь жилых помещений
(кв. м)	Количество помещений
(ед.) 	Количество граждан 
(чел.)	Предоставляемая площадь (кв. м)	Образованы земельные участки под строительство	Оформлены права застройщика на земельные участки	Подготовлена проектная документация	Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений	Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений	Получено разрешение на строительство	Дом введен в эксплуатацию	Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения	Завершено переселение 			
																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Этап 2019 года 			
 	Итого г. Орел:	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Строительство многоквартирных домов	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	 	 	 	 	х	х	х	 	 	 	 	 	 			
 	Приобретение квартир у застройщика строящихся многоквартирных домах	2040,20	78	248	2507,70	х	х	х	х	МК №№117,118 от 29.12.2019. МК №№ 63,64,65,66,67 от 22.06.2020. МК № 70от 07.07.2020. МК № 88 от 05.08.2020	х	14.08.2020 № 57 301000-292020 № 57 301000-402020	х	х			
 	Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Этап 2020 года 			
 	Итого г. Орел:	1052,00	26	93	1399,16	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Строительство многоквартирных домов	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	726,60	19	69	1028,60	х	х	х	 	МК №№ 183, 184, 185 от 10.12.2020; МК № 188 от 21.12.2020;  МК № 190 от 28.12.2020; МК №26 от 19.04.2021  	х	х	 	 			
 	Приобретение квартир у застройщика строящихся многоквартирных домах	325,40	7	24	370,56	х	х	х	х	МК №№ 79, 80, 81, 82, 83, 84 от 28.07.2020; МК №85 от 04.08.2020       	х	30.09.2020 № 57-301000-402020; 09.09.2020 	х	х			
 	Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Этап 2021 года 			
 	Итого г. Орел:	2931,30	116	347	3898,63	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Строительство многоквартирных домов	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
 	Приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах	1019,90	23	87	1420,70	х	х	х	 	МК №№ 196,197,198,199 от 11.01.2021; МК №26 от 19.04.2021	х	09.09.2020	 	 			
 	Приобретение квартир у застройщика строящихся многоквартирных домах	1911,40	98	260	2477,93	х	х	х	х	 	х	 	х	х			
 	Приобретение квартир у лиц не являющихся застройщиком	 	 	 	 	х	х	х	х	х	х	х	х	х			
																		
Первый заместитель Мэра 
города Орла											О.В. Минкин