РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орел»
Администрация города Орла

постановление
  18 июня 2013г.                                                                                   2793
Орел

О внесении изменений в постановление администрации города Орла  от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Орла, постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Орла от 19.09.2012 № 3092 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы», изложив приложение в новой редакции (приложение).
2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е. Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла А.С. Бойко.

Глава администрации
        города Орла	                                                                            М. Ю. Берников

                                                                      

Приложение
к постановлению
администрации города Орла
от 18 июня 2013г. № 2793
 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Паспорт
ведомственной целевой программы
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция
улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы»

Наименование     
ведомственной    
целевой программы	Ведомственная целевая программа «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» (далее - Программа)                                             	
Главный          
распорядитель    
бюджетных средств	Финансовое управление администрации города Орла.                        	
Сроки реализации 
программы        	Срок реализации:                                       
2013 - 2015 годы.                                      	
Цели и задачи    
программы        	Цели Программы:                                        
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;             
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла;                      
Задачи:                                                
- проведение ремонта, капитального ремонта,            
строительства и реконструкции автомобильных дорог      
общего пользования местного значения города Орла;      
- доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований.  	
Ответственный    
исполнитель      	Муниципальное казенное учреждение «Управление          
коммунальным хозяйством города Орла», подрядные организации, определенные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».                 	
Ожидаемые        
результаты       
реализации       
программы        	Реализация Программы позволит выполнить комплекс работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла протяженностью не менее 71,525 км и улучшить их транспортно-эксплуатационное состояние.                	
Целевые          
индикаторы и     
показатели       	По итогам реализации Программы планируется получить следующие результаты:                                  
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.                                 	
Объемы и         
источники        
финансирования   	Общий объем средств на реализацию Программы -          
1119398,583 тыс. руб., из них по источникам:                 
- средства дорожного фонда Орловской области:          
1073587,068 тыс. руб.;                                     
- средства бюджета города Орла: 45811,515 тыс. руб., в том числе по годам:                                        
- 2013 год – 267848,583 тыс. руб., из них по источникам:     
- средства дорожного фонда Орловской области:          
255654,177 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 12194,406 тыс. руб.,       
- 2014 год – 391450,000 тыс. руб., из них по источникам:     
- средства дорожного фонда Орловской области:          
375565,096 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 15884,904 тыс. руб.,       
- 2015 год – 460100,000 тыс. руб., из них по источникам:     
- средства дорожного фонда Орловской области:          
442367,795 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 17732,205 тыс. руб.        	

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Орла составляет 436,33 км.
Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транспорта, они находятся в совместном использовании населением, местными предприятиями и оказывают влияние на экономику города.
Город Орел располагает дорогами, не обеспеченными достаточным уровнем организации безопасности движения, что ведет к ограничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их пропускной способности, к увеличению затрат пользователей дорогами от потери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транспортным требованиям.
Существующая сеть автомобильных дорог города не соответствует требованиям интенсивного развития экономики, недостаточный уровень автомобильных перевозок замедлил ее развитие. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.
Разработка и реализация Программы позволит комплексно подойти к развитию автомобильных дорог, искусственных сооружений и технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобильных дорог окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие города.
Основные требования, предъявляемые к автомобильным дорогам - обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов.
Неудовлетворительное качество улично-дорожной сети является причиной ряда негативных социальных последствий, включая высокий уровень ДТП и большое количество людей, получивших травмы.
Выполнение комплекса работ по ремонту автомобильных дорог является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства.

2. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются:
- приведение дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, а также тротуаров, ливневой канализации и искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети города Орла.
Для достижения указанных целей необходимо решить задачу по доведению технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла до нормативных требований путем осуществления разработки проектно-сметной документации, ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и обследования мостов города Орла.
В результате выполнения Программы ожидается:
- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети города;
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 16,7 п. п.
Плановые показатели реализации и объемы финансирования ведомственной целевой Программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» приведены в приложении № 1 к Программе.

3. Описание мероприятий Программы

В рамках Программы осуществляются следующие основные мероприятия:
1. Изготовление проектно-сметной документации на ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкцию объектов автомобильных дорог города Орла.
2. Проверка и (или) экспертиза достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, организация осуществления технического надзора и лабораторного контроля качества выполненных работ.
3. Определение подрядных организаций для выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов автомобильных дорог города Орла в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
4. Обследование состояния искусственных сооружений.
Перечень объектов улично-дорожной сети муниципального образования «Город Орел», планируемых к ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции в 2013 - 2015 годах представлен в приложении № 2 к Программе. Перечень подлежит ежегодной корректировке с учетом результатов мониторинга улично-дорожной сети и выделенных объемов бюджетного финансирования.

4. Срок (период) реализации Программы

Срок реализации Программы: 2013 - 2015 годы.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем средств на реализацию Программы – 1119398,583 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области 1073587,068 тыс. руб.;                                     
- средства бюджета города Орла: 45811,515 тыс. руб.
В том числе по годам:                                        
2013 год – 266858,583 тыс. руб., из них по источникам:
- средства дорожного фонда Орловской области 255654,177 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 11204,406 тыс. руб.,       
2014 год - 391450000 руб., из них по источникам:     
- средства дорожного фонда Орловской области 375565,096 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 15884,904 тыс. руб.,
2015 год – 460100,000 тыс. руб., из них по источникам:     
- средства дорожного фонда Орловской области 442367,795 тыс. руб.;                                      
- средства бюджета города Орла: 17732,205 тыс. руб.        
Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения аналогичных работ за прошедшие периоды.
Для выполнения работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети города Орла необходимо разработать сметные расчеты и проектно-сметную документацию. Документация обязательно проходит государственную экспертизу или проверку достоверности определения сметной стоимости работ.
Конкретная стоимость изготовления сметных расчетов и проектно-сметной документации по каждому объекту будет определена по итогам проведения процедуры публичных торгов в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Распределение объемов финансирования по категориям работ, которые будут осуществляться в рамках ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы», представлено в приложении № 3 к Программе.
Финансово-экономическое обоснование ведомственной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Орла на 2013 - 2015 годы» представлено в приложении № 4 к Программе.
В случае если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции улично-дорожной сети образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:
- изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на последующие периоды;
- проведение ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов, автомобильных дорог местного значения города Орла, включенных в резервный перечень представлено в приложение № 5 к Программе;
- финансирование работ по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции включенных в программу объектов улично-дорожной сети, в случае если потребность в дополнительном финансировании обусловлена увеличением объемов работ по сравнению с первоначально запланированными.

6. Механизм реализации Программы

Формирование перечня объектов улично-дорожной сети для включения в программу ремонта осуществляется управлением городского хозяйства администрации города Орла на основании результатов сезонных обследований состояния улично-дорожной сети, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.
Главными распорядителями бюджетных средств, предназначенных на реализацию Программы, являются финансовое управление администрации города Орла, получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы, является муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» является заказчиком производства работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации, осуществлению технического надзора (в случае невозможности осуществления данных функций заказчиком работ), ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения города Орла, обследованию мостовых сооружений специализированными организациями. При этом на муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» возлагаются обязанности по:
- подготовке и утверждению документации, необходимой для отбора подрядных организаций для изготовления проектно-сметной документации и проведения ремонтных работ, заключению муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
- организации контроля за качеством выполняемых работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города Орла;
- формированию и организации работы комиссий по приемке выполненных работ по ремонту, капитальному ремонту улично-дорожной сети города Орла.
Управление городского хозяйства администрации города Орла осуществляет контроль за реализацией Программы и достижением конечных результатов Программы. Контроль за выполнением целевых индикаторов и показателей Программы будет осуществляться на основании актов выполненных работ, а также на основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.
Муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и подрядные организации несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств.
В целях эффективного управления и адресного контроля за реализацией Программы управление городского хозяйства администрации города Орла ежемесячно осуществляет мониторинг показателей результативности реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.
По результатам мониторинга управлением городского хозяйства администрации города Орла проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств. Отчет о реализации Программы представляется поквартально в управление экономики, потребительского рынка и трудовых отношений администрации города Орла.
В ходе реализации Программы в целях обеспечения своевременного осуществления ремонтно-строительных работ, учитывая их сезонный характер, длительность конкурсных процедур, предусмотренных Федеральным законом от 21.08.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», риск недобросовестного исполнения контракта на этапе разработки проектно-сметной документации, исполнители Программы обеспечивают организацию исполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проверке достоверности ее сметной стоимости или государственной экспертизе проектно-сметной документации в год, предшествующий году производства работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объекта, включенного в Программу.
В случае уменьшения объемов финансирования Программы объекты соответствующего года перераспределяются между основным и резервным перечнями ремонта, которые утверждаются правовым актом администрации по результатам разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы или в соответствующих случаях проверки достоверности определения сметной стоимости объекта. В случае невозможности выполнения работ в отношении резервного перечня дорог он подлежит включению в основной перечень объектов последующего года. Очередность определяется порядковым номером в перечне.

7. Риски реализации Программы

Ограничение финансирования Программы приведет к недовыполнению запланированных мероприятий, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение состояния объектов улично-дорожной сети, а именно ухудшится состояние дорожного покрытия, уменьшится пропускная способность улиц, увеличится количество ДТП, в том числе с пострадавшими.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации города Орла от 25.10.2010 № 3493 «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ города Орла».

						Приложение № 1
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»	

							
							
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»	

													
													
  Цели, задачи, мероприятия, показатели 	Ед. изм.	Ответственный исполнитель	Методика расчета	Источник информации	Период сбора	 Коэф. Значимости цели / задачи / мероприятия	Объем финансовых средств, тыс. руб., в т.ч.	 Целевое назначение 	
							 Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	Значение	Год достижения 	
													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Программная составляющая, всего	руб.	 	x       	x        	x    	x      	1119398,583	267848,583	391450,000	460100,000	x           	x      	
В том числе по источникам финансирования:  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Средства Дорожного фонда Орловской области        	руб.	 	 	 	 	 	1073587,068	255654,177	375565,096	442367,795	x           	x      	
Средства бюджета города Орла	руб.	 	 	 	 	 	45811,515	12194,406	15884,904	17732,205	x           	x      	
Достижение целей 
Программы:       
- цель 1         
приведение       
дорожного        
покрытия         
автомобильных    
дорог общего     
пользования      
местного значения
города Орла, а   
также тротуаров, 
ливневой         
канализации и    
искусственных    
сооружений в     
соответствие с   
нормативными     
требованиями к   
транспортно-     
эксплуатационному
состоянию;       
- цель 2         
улучшение        
транспортно-     
эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети    
города Орла      	руб.	x       	x       	x        	x    	1      	1119398,583	267848,583	391450,000	460100,000	x           	x      	
В том числе по источникам финансирования:  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Средства Дорожного фонда Орловской области         	руб.	 	 	 	 	 	1073587,068	255654,177	375565,096	442367,795	x           	x      	
Средства бюджета города Орла	руб.	 	 	 	 	 	45811,515	12194,406	15884,904	17732,205	x           	x      	
Решение задач    
Программы:       
- задача 1       
проведение       
ремонта,         
капитального     
ремонта,         
строительства и  
реконструкции    
автомобильных    
дорог общего     
пользования      
местного значения
города Орла;     
- задача 2       
доведение        
технического и   
эксплуатационного
состояния        
автомобильных    
дорог общего     
пользования      
местного значения
города Орла до   
нормативных      
требований          	руб.	x       	x       	x        	x    	1      	1119398,583	267848,583	391450,000	460100,000	x           	x      	
В том числе по источникам финансирования:  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Средства Дорожного фонда Орловской области      	руб.	 	 	 	 	 	1073587,068	255654,177	375565,096	442367,795	x           	x      	
Средства бюджета города Орла	руб.	 	 	 	 	 	45811,515	12194,406	15884,904	17732,205	x           	x      	
Мероприятие 1    
Ремонт объектов  
УДС, всего       	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x       	x        	x    	1      	427450,670	203440,670	92190,000	131820,000	x           	x      	
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Улучшение        
транспортно-     
эксплуатационного
состояния        
объектов ремонта 
УДС 	 		Ведомст-  
венные
отчеты  	Статисти-
ческие   
сведения 
в произ- 
вольной  
форме    	1 раз в год	x      	427450,670	203440,670	92190,000	131820,000	увеличение  
доли        
протяжен-   
ности       
автомобиль- 
ных дорог   
общего      
пользования 
местного    
значения,   
отвечающих  
нормативным 
требованиям,
в общей     
протяжен-   
ности       
автомобиль- 
ных дорог   
общего      
пользования 
местного    
значения на 
16,7 п. п.	Декабрь 2015 года	
В том числе по источникам финансирования:   	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	
Средства Дорожного фонда Орловской области        	руб.		 	 	 	 	418508,959	196739,061	91268,099	130501,799		 	
Средства бюджета города Орла	руб.		 	 	 	 	8941,712	6701,610	921,901	1318,201		 	
Мероприятие 2    
Капитальный      
ремонт объектов  
УДС            	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x       	x        	x    	1      	478555,912	62015,912	245760,000	170780,000		x      	
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Улучшение        
транспортно-     
эксплуатационного
состояния        
объектов         
капитального     
ремонта УДС             	 		Ведомст- венные отчеты  	Статисти-
ческие   
сведения 
в произ- 
вольной  
форме    	1 раз в год	x      	478555,912	62015,912	245760,000	170780,000		Декабрь 2015 года	
В том числе по источникам финансирования:  	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	
Средства Дорожного фонда Орловской области      	руб.		 	 	 	 	454628,112	58915,116	233471,998	162240,998		 	
Средства бюджета города Орла	руб.		 	 	 	 	23927,800	3100,796	12288,003	8539,002		 	
Мероприятие 3 Строительство объектов УДС   	руб.	МКУ "УКХ города Орла" 	x       	x        	x    	1      	96800,000	0,000	0,000	96800,000		x      	
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Увеличение       
протяженности УДС
с твердым        
покрытием              	 		Ведомст- венные отчеты 	Статисти-
ческие   
сведения 
в произ- 
вольной  
форме    	1 раз в год	x      	96800,000	0,000	0,000	96800,000	увеличение  
доли        
протяжен-   
ности       
автомобиль- 
ных дорог   
общего      
пользования 
местного    
значения,   
отвечающих  
нормативным 
требованиям,
в общей     
протяжен-   
ности       
автомобиль- 
ных дорог   
общего      
пользования 
местного    
значения на 
16,7 п. п. 	Декабрь 2015 года	
В том числе по источникам финансирования:  	 		 	 	 	 	 	 	 	 		 	
Средства Дорожного фонда Орловской области        	руб.		 	 	 	 	91959,999	0,000	0,000	91959,999		 	
Средства бюджета города Орла	руб.		 	 	 	 	4840,001	0,000	0,000	4840,001		 	
Мероприятие 4    
Реконструкция    
объектов УДС         	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x       	x        	x    	1      	113700,000	0,000	53000,000	60700,000		x      	
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Улучшение        
транспортно-     
эксплуатационного
состояния        
объектов         
реконструкции УДС         	 		Ведомст- венные отчеты 	Статисти-
ческие   
сведения 
в произ- 
вольной  
форме    	1 раз в год	x      	113700,000	0,000	53000,000	60700,000		Декабрь 2015 года	
В том числе по источникам финансирования: 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Средства Дорожного фонда Орловской области   	руб.	 	 	 	 	 	108014,999	0,000	50350,000	57664,999	 	 	
Средства бюджета города Орла	руб.	 	 	 	 	 	5685,001	0,000	2650,001	3035,001	 	 	
Мероприятие 5 Обследование     
мостов          	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x       	x        	x    	1      	2000,000	2392,000	0,000	0,000	x           	x      	
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Получение        
заключений и     
рекомендаций по  
эксплуатации и   
ремонту 7 мостов          	 		Ведомст- венные отчеты 	Статисти-
ческие   
сведения 
в произ- 
вольной  
форме    	1 раз в год	x      	2000,000	2392,000	0,000	0,000	x           	Декабрь 2015 года	
В том числе по источникам финансирования  	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Средства Дорожного фонда Орловской области        	руб.		 	 	 	 	0,000	0,000	0,000	0,000	 	 	
Средства бюджета города Орла	руб.		 	 	 	 	2000,000	2392,000	0,000	0,000	 	 	
Мероприятие 6    
Обследование     
путепроводов        	руб.	МКУ "УКХ города Орла"	x       	x        	x    	1      	500,000	0,000	500,000	0,000	x           	x      	
Название         
показателя       
результата       
мероприятия      
Получение        
заключений и     
рекомендаций по  
эксплуатации и   
ремонту 5        
путепроводов             	 		Ведомст- венные отчеты 	Статисти-
ческие   
сведения 
в произ- 
вольной  
форме    	1 раз в год	x      	500,000	0,000	500,000	0,000	x           	Декабрь 2015 года	
В том числе по источникам финансирования  	 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Средства Дорожного фонда Орловской области       	руб.		 	 	 	 	475,000	0,000	475,000	0,000	 	 	
Средства бюджета города Орла	руб.		 	 	 	 	25,000	0,000	25,000	0,000	 	 	
ВСЕГО расходов по ведомственной целевой Программе  	руб.	 	x       	x        	x    	x      	1119398,583	267848,583	391450,000	460100,000	x           	x      	

Приложение № 2
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013-2015 годы»	

	

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА,
ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
В 2013 - 2015 ГОДАХ	

	
							
 № п/п	Наименование объекта           	Категория объекта	Протяженность объекта, км	Стоимость работ, тыс. руб.	Средства Дорожного фонда, тыс. руб.	Средства бюджета города Орла, тыс. руб.	
1	2	3	4	5	6	7	
2013 год	
Ремонт	
Заводской район	
1	ул. Поселковая от «Лужковского» моста до границы «г. Орел»	дорога   	17800 кв. м.	13247,391	13114,917	132,474	
2	909 квартал (ул. Машкарина - ул. Чечневой, ул. Саханская - ул. Планерная)	дорога   	14047 кв.м.	10321,727	10218,510	103,217	
3	ул. Латышских стрелков от Карачевского шоссе до ул. Авиационная	дорога   	5500 кв.м.	5624,003	5567,763	56,240	
4	ул. МОПРа от ул. Комсомольская до ул. Маяковского	дорога   	5000 кв.м.	3689,837	3652,938	36,898	
5	ул. Панчука	дорога 	9900 кв.м.	7390,271	7316,368	73,903	
6	ул. 1-я Пушкарная от ул. 2-я Посадская до ул. Панчука	дорога   	2900 кв.м.	2248,270	2225,788	22,483	
7	ул. 2-я Посадская от ул. Васильевская до ул. 1-я Пушкарная	дорога   	2450 кв.м.	1908,744	1889,656	19,087	
8	ул. Васильевская                           	дорога	2,6	31346,036	31032,575	313,460	
9	пер. Пищевой	дорога	2602,5 кв.м.	2629,296	2603,003	26,293	
10	ул. Машиностроительная (от трамвайной линии 2 до границы с Орловским районом)	дорога	12360 кв.м.	12527,222	12401,950	125,272	
11	ул. Латышских Стрелков (от ул. МОПРа до Карачевского шоссе)	дорога	9200 кв. м.	10117,949	10016,770	101,179	
12	ул. Поселковая (четная сторона на выезде к автомагистрали "Крым-2")	дорога	1160,52 кв. м.	1295,799	1282,841	12,958	
Советский район	
1	ул. Салтыкова-Щедрина (с восстановлением покрытия парковочного кармана от ул. Гуртьева до ул. Красноармейская)  	дорога   	2754 кв. м.	2447,203	2422,731	24,472	
2	ул. Горького с разворотным кольцом	дорога	6200 кв.м.	4391,906	4347,987	43,919	
3	Болховское шоссе	дорога	10140 кв.м.	7500,524	7425,519	75,005	
4	Бульвар Победы	дорога	3425 кв.м.	3738,428	3701,043	37,384	
5	пер. Почтовый (от Александровского моста до ул. Ленина) с восстановлением покрытия парковочного кармана	дорога	3680 кв.м.	2972,745	2943,017	29,727	
6	Ремонт по Бульвару Победы	дорога	800 кв.м.	830,485	-	830,485	
7	Ремонт  пешеходных дорожек: ул. Игнатова 13а, ул. Приборостроительная 50; ул. Приборостроительная 28.	дорога	1420 кв.м.	362,125	-	362,125	
8	ул. Сурена Шаумяна (от ул. Пионерская до ул. Полесская)                         	дорога	2891 кв. м.	1821,512	1803,297	18,215	
9	пл. Жукова                                  	дорога	3795 кв. м.	2271,109	2248,398	22,711	
10	ул. Матросова	дорога	2760 кв. м.	1706,367	1689,303	17,064	
11	проезд от Наугорского шоссе до ул. Приборостроительная	дорога	2450 кв. м.	1521,381	1506,167	15,214	
12	ул. Ломоносова                             	дорога	5242 кв. м.	2950,014	2920,514	29,500	
13	пер. Ипподромный (от ул. Матвеева до ул. Приборостроительная	дорога	3200 кв. м.	2998,791	2968,803	29,988	
14	Ремонт тротуарной плитки по ул. Пролетарская гора (в районе здания администрации города Орла)	тротуар	1098 кв. м.	1502,266	-	1502,266	
15	ул. Веселая (от ул. Генерала Родина до ул. Пархоменко)	дорога	900 кв. м. 	990,000	-	990,000	
Железнодорожный район	
1	ул. Магазинная от ул. 1-я Курская до ул. 3-я Курская                             	дорога    	6600 кв.м.	5142,207	5090,785	51,422	
2	ул. 5 Августа от ул. Ляшко до ул. 1-я Курская	дорога	1250 кв.м.	933,761	924,424	9,338	
3	ул. Старо-Московская                       	дорога	7900 кв.м.	5829,883	5771,584	58,299	
4	ул. Пушкина (от пл. Мира до ул. 1-я Курская)	дорога   	12864 кв.м.	11735,337	11617,984	117,353	
5	ул. 4-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская, от ул. Новосильская до ул. Русанова, от ул. Русанова до ул. 5 Августа	дорога	6240 кв.м.	4435,438	4391,084	44,354	
6	ул. 2-я Курская от ул. 5 Августа до ул. Русанова	дорога	300 кв.м.	197,046	195,076	1,970	
7	ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. Новосильская	дорога	700 кв.м.	459,655	455,059	4,597	
8	ул. Старо-Привокзальная          	дорога	2900 кв. м.	2967,947	2938,268	29,679	
9	Привокзальная площадь	дорога	1050 кв. м.	695,117	688,166	6,951	
Северный район	
1	ул. Бурова от Московского шоссе до ул. Космонавтов	дорога   	9600 кв.м.	6828,673	6760,386	68,287	
2	ул. Космонавтов	дорога	6000 кв.м.	4189,121	4147,230	41,891	
3	ул. Раздольная от ул. Металлургов до разворотного кольца троллейбуса (ОАО "Северстальметиз")	дорога	20000 кв.м.	12898,805	12769,817	128,988	
4	ул. Благининой	дорога	2960 кв. м.	1971,138	1951,427	19,711	
5	ул. Блынского	дорога	3150 кв. м.	2999,791	2969,793	29,998	
6	Ремонт проезда от пер. Межевой до ул. Михалицина	дорога	1060,5 кв. м.	775,878	768,119	7,759	
7	Ремонт улично-дорожной сети по ул. Металлургов в районе дома № 17	тротуар	1500 кв. м.	1029,471	-	1029,471	
Итого:	203440,670	196739,061	6701,610	
Капитальный ремонт	
1	ул. Городская 2-я очередь                  	дорога   	1,1	62015,912	58915,116	3100,796	
Обследование мостов	
1	Мост «Дружба» через реку Ока                	мост     	-	-	-	-	
2	«Тургеневский мост» через реку Орлик       	мост     	-	-	-	-	
3	Мост через реку Ока в створе ул. Герцена   	мост     	-	-	-	-	
4	Мост через реку Ока в створе ул. Раздольная	мост     	-	-	-	-	
5	Мост через реку Орлик «Колхозный»          	мост     	-	-	-	-	
6	Мост через реку Ока «Лужковский»           	мост     	-	-	-	-	
7	Путепровод через ж/д пути в створе ул. 1-я Курская                       	путепровод	-	-	-	-	
8	Путепровод через железную дорогу «378 км на ул. Михалицина»	путепровод	-	-	-	-	
9	Путепровод через железную дорогу «Кромской»	путепровод	-	-	-	-	
10	Пешеходный подвевсной мост Ботаника через р. Ока	мост     	-	-	-	-	
11	Путепровод через железную дорогу «Ливенский»	путепровод	-	-	-	-	
12	Путепровод через железную дорогу «Южный»	путепровод	-	-	-	-	
 	Стоимость работ по обследованию мостов и путепровода	тыс. руб.	-	2392,000	-	2392,000	
Всего на 2013 год:	267848,582	255654,177	12194,406	
2014 год	
Ремонт	
2	ул. Привокзальная 	дорога   	0,67	-	-	-	
3	ул. Пушкина от ул. 1-я Курская  до ул. Ляшко	дорога   	1,2	-	-	-	
6	ул. Покровская                             	дорога   	0,47	-	-	-	
7	ул. Революции                               	дорога   	0,484	-	-	-	
8	ул. Советская ремонт тротуаров             	тротуары 	-	-	-	-	
9	ул. Ляшко                                  	дорога   	1,8	-	-	-	
Капитальный ремонт	
10	ул. Игнатова                               	дорога    	1,4	-	-	-	
11	ул. 7 Ноября                               	дорога   	1,2	-	-	-	
12	ул. Пионерская                             	дорога   	0,939	-	-	-	
13	ул. Максима Горького от пл. Ленина до пешеходного моста      	дорога    	0,74	-	-	-	
14	ул. 4-я Курская                            	дорога   	0,775	-	-	-	
15	ул. Льва Толстого                          	дорога   	0,77	-	-	-	
16	ул. Сурена Шаумяна                         	дорога   	0,97	-	-	-	
17	пер. Трамвайный                             	дорога   	0,315	-	-	-	
18	ул. 3-я Курская                            	дорога   	1,31	-	-	-	
19	ул. 2-я Курская от ул. Пушкина до ул. 5Августа 	дорога   	0,73	-	-	-	
20	ул. Русанова                                	дорога   	0,92	-	-	-	
21	ул. Гагарина                               	дорога   	1,6	-	-	-	
22	ул. МОПРа                                  	дорога   	1,125	-	-	-	
23	ул. 1-я Посадская                          	дорога   	1,4	-	-	-	
24	ул. 2-я Посадская                          	дорога   	0,72	-	-	-	
25	ул. Рощинская                              	дорога   	1,5	-	-	-	
26	пер. Межевой                               	дорога   	0,48	-	-	-	
37	Проезд от ул. Металлургов до ул. Рощинская  	дорога   	0,56	-	-	-	
28	ул. Гостиная                               	дорога   	0,46	-	-	-	
Реконструкция	
29	ул. Металлургов от Московского шоссе до ул. Радзевича-Белевича                     	дорога   	1,8	-	-	-	
30	Проезд от ул. Бурова до ул. Металлургов    	проезд   	0,82	-	-	-	
31	Проезд от пер. Межевой до ул. Михалицына   	проезд   	0,435	-	-	-	
32	ул. Ломоносова                             	дорога   	0,68	-	-	-	
2015 год	
Ремонт	
1	пер. Южный от ул. Тульская до ул. Андриабужная                                	дорога   	0,47	-	-	-	
2	ул. Прядильная                             	дорога   	1,15	 	-	-	
3	ул. Кромская                               	дорога   	0,8	-	-	-	
4	ул. Планерная в 909 квартале               	дорога   	0,775	-	-	-	
5	ул. Панчука                                	дорога   	1,4	-	-	-	
6	ул. Черкасская                             	дорога   	1,4	-	-	-	
7	ул. Силикатная                             	дорога   	1,1	-	-	-	
8	ул. Раздольная от ул. Рощинская до         	дорога   	3,6	-	-	 	
	разворотного кольца троллейбуса						
	ОАО «Северсталь-метиз» 1-я очередь             						
Капитальный ремонт	
9	ул. Ленина                                 	дорога   	0,63	-	-	-	
10	ул. Пролетарская гора                      	дорога   	0,71	-	-	-	
11	ул. Гуртьева                               	дорога   	0,71	-	-	-	
12	ул. Октябрьская от ул. Тургенева до        	дорога   	0,315	-	-	-	
	смотровой площадки                         						
13	ул. Паровозная                             	дорога   	1,91	-	-	-	
14	ул. Тульская                               	дорога   	1,91	-	-	-	
15	ул. Фомина                                 	дорога   	1,15	-	-	-	
16	пл. Богоявленская                          	площадь  	-	-	 	-	
17	пл. Комсомольская                           	площадь  	-	-	-	 	
18	ул. Латышских стрелков                     	дорога   	2	-	-	-	
19	Пер. Воскресенский от ул. Комсомольская до ул. Левый берег реки Ока                   	дорога   	0,45	-	-	-	
20	Московское шоссе от ул. Рощинская до границы МО «Город Орел»   	дорога   	0,77	-	-	 	
21	ул. Октябрьская от ул. Игнатова до ул. Раздольная  	дорога   	1,15	-	-	-	
Строительство	
22	ул. Андриабужная                           	дорога   	1,2	-	-	-	
23	улица от пер. Бетонный до микрорайона «Ботаника»	дорога   	-	-	-	-	
Реконструкция	
24	пл. Ленина                                 	площадь  	-	-	-	-	
25	Бульвар Победы                             	бульвар  	0,81	-	-	-	
26	пл. Жукова                                  	площадь  	-	-	-	-	
 	Общая протяженность объектов (км)                     	71,525	-	-	-	
 	Ориентировочный объем финансирования, тыс. руб.	1119398,583	-	-	-	

Приложение № 3
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОД»

№    
п/п	Категория работ	Количество 
 объектов  
    УДС    
 (единиц)  	 Ориентировочно необходимый объем  
     финансирования (тыс. руб.) <*>     	
			Всего	Средства  
 Дорожного  
 фонда	Средства  
бюджета
города Орла	
2013 год                                                                 	
1        	Ремонт         	не менее 10 	203440,67	196739,061	6701,61	
2        	Капитальный    
ремонт         	не менее 1	62015,912	58915,166	3100,796	
3        	Строительство  	-          	0         	0           	0          	
4        	Реконструкция  	- 	0	0	0	
5        	Обследование   
мостов         	не менее 7 	2392,000	0	2392,000	
ИТОГО                    	-          	267848,583	255654,177	12194,406	
2014 год                                                                 	
1        	Ремонт         	не менее 9 	92190,000	91268,099	921,901	
2        	Капитальный    
ремонт         	не менее 19	245760,000	233471,998	12288,003	
3        	Строительство  	-          	0         	0           	0          	
4        	Реконструкция  	не менее 4	53000,000	50350,000	2650,001	
5        	Обследование   
путепроводов   	не менее 4 	500,000    	475,000    	25,000	
ИТОГО                    	-          	391450,000 	375565,096	15884,904	
2015 год                                                                 	
1        	Ремонт         	не менее 8 	131820,000	130501,799	1318,201	
2        	Капитальный    
ремонт         	не менее 13	170780,000	162240,998 	8539,002  	
3        	Строительство  	не менее 2 	96800,000  	91960,999  	4840,001  	
4        	Реконструкция  	не менее 3 	60700,000	57664,999	3035,001	
ИТОГО                    	-          	460100,000 	442367,795	17732,205	
Всего по 
Программе			1119398,583	1073587,068	45811,515	

Примечание.
Конкретный объем финансирования мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов улично-дорожной сети на 2013 - 2015 годы в городе Орле будет определен на основании проектно-сметной документации, по результатам ее экспертизы либо проверки достоверности сметной стоимости заказчиком работ. Стоимость разработки ПСД, экспертизы и проверки достоверности сметной стоимости входит в состав ориентировочного финансирования по категориям работ.

Приложение № 4
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Наименование мероприятий Программы	Метод оценки затрат	Расчет затрат	Потребность  
 в средствах, тыс. руб.	
1	2	3	4	
Мероприятие 1      
Ремонт объектов УДС	аналоговый	2013 год – 203440,670 тыс. руб.
2014 год – 92190,000 тыс. руб. 
2015 год – 131820,00 тыс. руб.	427450,670	
Мероприятие 2      
Капитальный ремонт объектов УДС       	аналоговый	2013 год – 62015,912 тыс. руб.
2014 год – 245760,000 тыс. руб.
2015 год – 170780,000 тыс. руб.	478555,912	
Мероприятие 3      
Строительство      
объектов УДС       	аналоговый	2015 год – 96800,000 тыс. руб.	96800,000	
Мероприятие 4      
Реконструкция      
объектов УДС       	аналоговый	2014 год – 53000,000 тыс. руб. 
2015 год – 60700,000 тыс. руб.	113700,000	
Мероприятие 5      
Обследование мостов	аналоговый	2013 год – 2392,000 тыс. руб.	2392,000	
Мероприятие 6      
Обследование       
путепроводов       	аналоговый	2014 год – 500,000 тыс. руб.	500,000	
Всего по Программе:			1119398,583	
__________________________________

Приложение № 5
к ведомственной целевой программе
«Ремонт, капитальный ремонт, строительство
и реконструкция улично-дорожной сети
города Орла на 2013 - 2015 годы»

РЕЗЕРВНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА ОРЛА ПОДЛЕЖАЩИХ РЕМОНТУ В 2013 ГОДУ

№ 
п/п	Наименование объекта	Категория 
 объекта	Протяженность
 объекта, км	
1	2	3	4	
Ремонт                                                                   	
1.	ул. Приборостроительная от ул. Максима      
Горького до ул. Октябрьская                 	дорога	0,57	
2.	ул. Приборостроительная от ул. Матвеева до  ул. Октябрьская                             	дорога	0,72	
3.	ул. 1-я Курская от ул. Старомосковская до   
ул. Ливенская                               	дорога	1,3	
4.	пер. Новосильский                           	дорога	0,22	
5.	ул. Ляшко от ул. Пушкина до ул. Грузовая	дорога	7800 кв.м.	
Реконструкция                                                            	
6.	ул. Бурова от Московского шоссе до дома  
№ 44 по ул. Бурова:
- второй пусковой комплекс от ул. Космонавтов до ул. Раздольная;
- третий пусковой комплекс от ул. Раздольная до дома № 44 по ул. Бурова.                      	дорога    	1,59

0,55

0,27	
7.	транспортная развязка на пересечении ул. Космонавтов с ул. Металлургов	дорога	2100 кв. м	
______________________________________